발전기별 예방정비 계획

('18. 12. 28)

◌ 대상기간 : ‘18.12.29 ∼ ’19.1.06

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당	#1 : ‘18.9.27 ~ ‘19.02.18
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동	#2 : ‘18.11.05 ~ ‘19.5.27
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수	#1 : 1.12 09:00 ~ 18:00
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~’20.4.10 #2 : ‘18.9.10 ~’20.8.07
	양양양수
	예천양수
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16	성능개선공사
	신보령	#2 : ‘18.9.08 ~ ‘19.1.15	거래소 조정
	삼천포	#3 : 1.03 ~ 3.28
	여 수
	영 흥
	태 안	#10 : 9.24 ~ ‘19.1.07	정비연장
	하 동
	삼척그린
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양	#1,2CC : 12.29 ~ 12.30
	군 산
	보 령	#6GT : 12.31 00:00 ~ 18:00
	GS당진
	부 산	#1CC : 10.25 ~ 12.29 #4CC : 12.28 ~ 12.30	정비연장
	부 천
	분 당
	서인천	#4CC : ‘19.12.30 09:00 ~ ’19.1.01 24:00
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산	#4GT : 12.29 ~ 12.30
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	포스코	#9CC : 12.30 08:00 ~ 15:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1CC : 12.30 02:00 ~ 24:00 #3GT : 1.01 02:00 ~ 22:00
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합
	안 동
	양주열병합
	포 천
	안 산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합
원자력	고 리
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.3.01 #2 : ‘18.7.16 ~ ’19.1.23 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.6.10 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.11.29	#1 : 지연 #2 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#1 : 8.18 ~ ‘19.2.25 #6 : ‘18.12.01 ~ ’19.4.30	#1 : 지연 #6 : 지연
	월 성
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)