발전기별 예방정비 계획

('18. 01. 25)

◌ 대상기간 : 1.26 ∼ 2.3

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#1 : 1.21 ~ 2.01
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당	#1 : ‘18.9.27 ~ ‘19.02.18
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동	#2 : ‘18.11.05 ~ ‘19.5.27
	용 담
	임 하
	주 암	#1,2 : 1.29 11:00 ~ 18:00
	충 주
	합 천
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.4.10 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수	#1 : 2.11 09:00 ~ 18:00 #2 : 2.12 09:00 ~ 18:00 #3 : 2.13 09:00 ~ 18:00 #4 : 2.14 09:00 ~ 18:00
	예천양수	#1 : 1.26 08:00 ~ 22:00
	청송양수	#1 : 1.26 09:00 ~ 18:00
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16	성능개선공사
	신보령
	삼천포	#3 : 1.03 ~ 3.28
	여 수
	영 흥
	태 안	#5 : 2.02 ~ 2.06 #10 : 9.24 ~ ‘19.2.4	정비연장
	하 동
	삼척그린
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		제주GT3 : 1.30 09:00 ~ 10:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산
	보 령
	GS당진	#4CC : 1.26 ~ 1.27
	부 산	#4CC : 1.26 09:00 ~ 16:00
	부 천
	분 당	#4GT : 1.27 09:00 ~ 18:00
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산	#4CC : 1.19 ~ 3.14
	율 촌
	인 천
	인천공항	#1GT : 1.1 ~ 7.31
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평 택	#2CC : 1.27 00:00 ~ 20:00
	포스코	#5CC,#6ST : 1.27 12:00 ~ 16:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1GT : 1.26 08:00 ~ 1.27 24:00 #1CC : 2.02 01:00 ~ 2.07 03:00
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합
	안 동
	양주열병합
	포 천
	안 산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산	#4GT : 2.02 ~ 2.09
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합	#1CC : 1.26 05:00 ~ 19:00
원자력	고 리
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.3.01 #2 : ‘18.7.16 ~ ’19.1.31 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.6.10 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.11.29	#1 : 지연 #2 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#1 : ‘18.8.18 ~ ‘19.2.22 #6 : ‘18.12.01 ~ ’19.4.30	#1 : 지연 #6 : 정상
	월 성
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)