발전기별 예방정비 계획

('19. 02. 01)

◌ 대상기간 : 2.2 ∼ 2.10

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보	#1 : 1.21 ~ 2.01 #3 : 2.11 ~ 3.22
	의 암
	청 평	#4 : 2.12 ~ 2.23
	춘 천
	팔 당	#1 : ‘18.9.27 ~ ‘19.05.19	기간연장
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동	#2 : ‘18.11.05 ~ ‘19.5.27
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수	#2 : 2.16 09:00 ~ 17:00
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.4.10 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수	#1 : 2.11 09:00 ~ 18:00 #2 : 2.12 09:00 ~ 18:00 #3 : 2.13 09:00 ~ 18:00 #4 : 2.14 09:00 ~ 22:00
	예천양수	#1,2 : 2.16 09:00 ~ 18:00
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#7 : 2.01 ~ 2.02
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.9.16	성능개선공사
	신보령
	삼천포	#2 : 1.31 11:00 ~ 2.02 08:00 #3 : 1.03 ~ 3.28 #5 : 2.06 00:00 ~ 12:00
	여 수	#2 : 2.11 ~ 4.20
	영 흥	#3 : 2.13 ~ 4.05
	태 안	#2 : 2.04 04:00 ~ 2.07 04:00 #5 : 2.02 ~ 2.05 #10 : 9.24 ~ ‘19.2.18	정비연장
	하 동
	삼척그린
	북 평	#1 : 2.09 ~ 4.22
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)		대구열 : 2.06 ~ 2.08
제주지역		남제주2 : 2.10 ~ 2.11

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	군 산
	보 령
	GS당진
	부 산
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산	#4CC : 1.19 ~ 3.14 #5GT : 2.7 ~ 2.9
	율 촌
	인 천
	인천공항	#1GT : 1.1 ~ 7.31 #2GT : 2.6 09:00 ~ 20:00
	일산복합	#5GT : 2.8 09:00 ~ 18:00
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	포스코
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1CC : 2.02 01:00 ~ 2.07 03:00
	별내열병합
	위례열병합	#1CC : 2.02 00:00 ~ 12:00
	세종열병합
	안 동
	양주열병합
	포 천
	안 산
	동두천	#1,2CC : 2.03 ~ 2.06
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산	#4GT : 2.02 ~ 2.09
	포천천연	#1CC : 2.02 00:00 ~ 2.04 20:00
	춘천열
	부산정관
	영남파워
	동탄열병합
원자력	고 리
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.3.01 #2 : ‘18.7.16 ~ ’19.2.15 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.6.10 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.11.29	#1 : 지연 #2 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#1 : ‘18.8.18 ~ ‘19.2.22 #6 : ‘18.12.01 ~ ’19.4.30	#1 : 지연 #6 : 정상
	월 성
	신월성

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)