발전기별 예방정비 계획

('19. 8. 23)

◌ 대상기간 : 8.24 ∼ 9.1

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암	#2 : 9.23 00:00 ~ 12.16 24:00
	청 평
	춘 천
	팔 당	#4 : ‘19.9.23 ~ ’20.01.30
	화 천	#3,4 : 8.31 18:00 ~ 9.1 18:00 #3 : 9.23 00:00 ~ 11.16 24:00
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수	#2 : 8.24 09:00 ~ 13:00 #1 : 8.24 09:00 ~ 15:00 #1,2 : 9.23 00:00 ~ 11.01 24:00
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.21 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.08	현대화사업
	양양양수	#3 : 7.30 16:00 ~ 9.11 24:00 #4 : 9.28 09:00 ~ 18:00
	예천양수	#2 : 9.23 08:00 ~ 9.25 18:00
	청송양수
	청평양수	#1 : 9.18 09:00 ~ 9.22 18:00
중유	울산화력	#5 : 9.16 ~ 11.14
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#2 : 9.16 ~ 12.12 #6 : 9.30 ~ 11.16
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.11.16
	신보령
	삼천포
	여 수	#2 : 9.21 ~ 10.02
	영 흥	#1 : 9.12 ~ 9.14 11:00
	태 안
	하 동
	삼척그린
	북 평	#2 : 9.10 ~ 11.22
	호 남
국내탄	동 해	#2 : 9.16 ~ 11.8
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		제주GT#3 : 8.28 09:00 ~ 10:00 제주DP#2 : 8.25 07:00 ~ 14:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양	#1CC : 9.21 ~ 10.13
	서 울
	군 산
	보 령
	GS당진
	부 산
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합	2-1 : 9.2 ~ 9.22
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천	#1CC : 9.20 ~ 11.08
	인천공항
	일산복합	#5GT : 9.16 ~ 11.1
	파주열병합
	판교열병합	#1CC : 8.24 ~ 8.25 18:00
	평 택
	포스코	#5CC : 8.25 09:00 ~ 13:00 #8CC : 8.25 03:00 ~ 22:00
	화성열병합
	수원광교	#1CC : 9.30 ~ 11.15
	수완열병합
	오 성	#1GT : 8.24 ~ 8.25 #3GT : 8.31 ~ 9.1 #2GT : 8.31 ~ 9.1
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합	#1CC : 9.23 ~ 9.24
	안 동
	양주열병합
	포천
	안산	#1CC : 9.11 18:00 ~ 9.16 08:00
	동두천	#2CC : 8.24 08:00 ~ 8.25 22:00
	대구그린파워
	아산배방
	하남열병합	#1CC : 8.31 ~ 9.1
	명품오산
	파주문산	#1CC : 9.12 08:00 ~ 9.16 06:00 #2CC : 9.12 00:00 ~ 9.14 06:00
	포천천연
	춘천열
	부산정관
	영남파워	#1CC : 9.12 ~ 9.15
	동탄열병합	#2CC : 9.12 ~ 9.19
	수원열병합	#1CC : 9.16 ~ 9.20
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
원자력	고 리	#4 : 7.9~11.22
	신고리
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.9.3 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.9.26 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.9.30 #6 : 5.30 ~ 9.6	#1 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울
	월 성
	신월성	#2 : 7.11 ~ 9.6

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8613)