발전기별 예방정비 계획

('19. 9. 11)

◌ 대상기간 : 9.12 ∼ 9.20

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당
	화 천	#3 : 9.19 10:00 ~ 9.20 24:00
	대 청	#2 : 9.17,9.18 09:00 ~ 18:00 9.19 09:00 ~ 12:00
	소양강	#2 : 9.17,9.18 09:00 ~ 18:00
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수
	산청양수	#1 : 9.16 18:00 ~ 22:00 9.18,9.20 09:00 ~ 18:00 #2 : 9.17,9.19 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.21 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.08	현대화사업
	양양양수	#1,3 : 9.18 12:00 ~ 14:00
	예천양수
	청송양수
	청평양수	#1 : 9.18 09:00 ~ 9.20 18:00
중유	울산화력	#5 : 9.16 ~ 11.14
	평택화력	#1 : 9.17 09:00 ~ 17:00 #2 : 9.18 09:00 ~ 17:00
	대산복합
석탄	당 진	#2 : 9.9 ~ 12.9
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.11.16
	신보령
	삼천포	#3 : 9.14 09:00 ~ 9.17 24:00
	여 수
	영 흥	#2 : 9.11 18:00 ~ 9.14 04:00
	태 안	#1 : 9.9 18:00 ~ 9.15 18:00 #6 : 9.9 ~ 9.13
	하 동	#2 : 9.6 17:00 ~ 11.30 17:00
	삼척그린
	북 평
	호 남
국내탄	동 해	#2 : 9.16 ~ 11.8
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
기타(중앙)
제주지역		한림 #1CC: 9.16 ~ 12.24 13:00 제주내연#1: 9.16 17:00 ~ 9.20 24:00

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울
	군 산
	보 령	#1GT : 9.16 ~ 12.11 #2GT : 9.8 ~ 12.11 #3GT : 9.18 ~ 12.10 #4GT : 9.1 ~ 12.10
	GS당진
	부 산	#3CC : 9.16 ~ 10.26
	부 천
	분 당	#1GT : 9.16 ~ 9.20 #2GT : 9.16 ~ 11.8
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합	#2-1 : 9.2 ~ 9.22 10:00
	영 월	#1CC : 9.2 ~ 10.30
	울 산	#1CC : 9.2 ~ 11.7 #5GT : 9.16 ~ 11.29
	율 촌
	인 천	#3CC : 9.20 ~ 11.8
	인천공항
	일산복합	#5GT : 9.16 ~ 11.1
	파주열병합
	판교열병합
	평 택
	포스코	#15GT : 9.7 ~ 10.24 #16GT : 9.14 ~ 10.31 #6ST : 9.14 ~ 10.24
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#1GT : 9.14 ~ 9.15
	별내열병합
	위례열병합
	세종열병합
	안 동
	양주열병합
	포천
	안산
	동두천	#1CC : 9.12 10:00 ~ 9.16 04:00 #2CC : 9.14 10:00 ~ 9.15 20:00
	대구그린파워	#1CC : 9.14 ~ 9.17
	아산배방
	하남열병합
	명품오산
	파주문산	#1GT : 9.12 08:00 ~ 9.17 10:00 #2GT : 9.12 08:00 ~ 9.16 06:00 #3,4GT : 9.12 00:00 ~ 9.14 06:00
	포천천연	#1CC : 9.12 ~ 9.15 18:00
	춘천열
	부산정관
	영남파워	#1CC : 9.12 ~ 9.15
	동탄열병합	#2CC : 9.12 ~ 9.19
	수원열병합	#1CC : 9.16 ~ 9.20
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
원자력	고 리	#4 : 7.9 ~ 11.16 #3 : 9.6 ~ ‘20.1.12
	신고리	#1 : 7.2 ~ 9.11 #2 : 9.4 ~ 11.14
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.9.19 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.11.20 #4 : ‘17.5.18 ~ ’19.9.30	#1 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#3 : 9.2 ~ 11.28
	월 성	#3 : 9.10 ~ 10.26
	신월성	#2 : 9.7 ~ 미정

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)