발전기별 예방정비 계획

('19. 10. 18)

◌ 대상기간 : 10.19 ∼ 10.27

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암	#2 : 9.23 ~ 12.16
	청 평	#1 : 10.14 09:00 ~ 11.7 #2 : 10.19 09:00 ~ 18:00
	춘 천	#1 : 10.24 10:00 ~ 13:00 #2 : 10.24 12:00 ~ 15:00
	팔 당
	화 천	#3 : 9.23 ~ 11.16
	대 청	#1 : 10.23 13:00 ~ 17:00
	소양강	#1 : 10.14 09:00 ~ 10.25 18:00
	안 동
	용 담	#1 : 10.21 09:00 ~ 18:00 10.22 09:00 ~ 12:00 #2 : 10.22 09:00 ~ 18:00
	임 하
	주 암	#1 : 10.22,25 09:00 ~ 12:00 10.23 09:00 ~ 18:00 #2 : 10.23 09:00 ~ 18:00 10.24,25 09:00 ~ 12:00
	충 주	#1 : 10.14 09:00 ~ 10.28 18:00 #2 : 10.22 09:00 ~ 20:00 #3 : 10.22 15:00 ~ 18:00 10.23 09:00 ~ 20:00 #4 : 10.22 15:00 ~ 18:00 10.24 09:00 ~ 20:00 #5 : 10.23 09:00 ~ 15:00 #6 : 10.23 11:00 ~ 17:00 #5,6 : 10.25 09:00 ~ 12:00
	합 천	#2 : 10.21 13:00 ~ 18:00 10.22 09:00 ~ 18:00
양수	무주양수	#1 : 9.23 ~ 11.1 #2 : 9.23 05:00 ~ 11.1
	산청양수	#1,2 : 10.21 11:00 ~ 13:00 #2 : 10.19 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.20 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.8.07	현대화사업
	양양양수
	예천양수
	청송양수
	청평양수
중유	울산화력	#5 : 9.16 ~ 11.14
	평택화력	#4 : 10.10 ~ 11.20
	대산복합
석탄	당 진	#2 : 9.9 ~ 12.9 #6 : 9.30 ~ 11.20
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’19.11.16
	신보령
	삼천포	#5 : 9.30 21:00 ~ ‘20.6.30 #6 : 10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수	#1 : 10.21 ~ 11.11
	영 흥
	태 안	#3 : 9.23 ~ 11.17 #8 : 10.19 19:00 ~ 10.21 06:00
	하 동	#2 : 9.6 17:00 ~ 11.30 17:00 #3 : 9.25 17:00 ~ 12.16 17:00
	삼척그린
	북 평	#2 : 9.10 ~ 11.22
	호 남	#2 : 10.10 ~ 10.22
국내탄	동 해	#2 : 9.16 ~ 11.8
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.06.30	연료전환 공사
원자력	고 리	#3 : ‘19.9.6 ~ ‘20.1.12 #4 : 7.9 ~ 11.16
	신고리	#2 : 9.4 ~ 11.19
	한 빛	#1 : ‘18.8.18 ~ ’19.10.26 #3 : ‘18.5.11 ~ ‘19.11.27 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.3.7	#1 : 지연 #3 : 지연 #4 : 지연
	한 울	#2 : ‘19.10.18 ~ ’20.1.3 #3 : 9.2 ~ 11.28 #5 : 9.25 ~ 12.30
	월 성	#3 : 9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울	#2CC : 10.19 ~ 10.20
	군 산	#1CC : 10.19 ~ 10.25
	보 령	#1GT : 9.16 ~ 12.11 #2GT : 9.8 ~ 12.11 #3GT : 9.18 ~ 12.10 #4GT : 9.1 ~ 12.10 #1ST : 9.16 ~ 12.11 #2ST : 9.23 ~ 12.10 #5,6GT,3ST : 9.23 05:00 ~ 11.8
	GS당진
	부 산	#3CC : 9.16 ~ 11.13
	부 천
	분 당	#2GT : 9.16 ~ 11.8 #6GT : 10.1 ~ 11.20 #7GT : 10.1 ~ 10.30 #8GT : 10.10 ~ 11.29 #2ST : 10.1 18:00 ~ 11.29 #4GT : 10.20 09:00 ~ 21:00
	서인천	#1,2CC : 10.19 ~ 10.20 #4CC : 10.21 ~ 10.30 #8CC : 10.10 ~ 10.19
	송 도	#1GT : 10.12 08:00 ~ 10.21 #2GT : 10.22 08:00 ~ 10.24
	신인천	#7GT : 10.14 ~ 10.27 #8GT,4ST : 10.21 ~ 10.25
	안 양
	안양열병합
	영 월	#1CC : 9.2 ~ 10.30
	울 산	#1CC : 9.2 ~ 11.7 #2CC : 10.12 ~ 12.19 #5GT : 9.16 ~ 11.29 #6GT,3ST : 9.27 ~ 11.29
	율 촌
	인 천	#1CC : 9.20 ~ 11.8 #2,3CC : 10.14 ~ 10.22
	인천공항	#1,2GT,1ST : 10.20 08:00 ~ 21:00
	일산복합	#5GT : 9.16 ~ 11.1 #6GT : 10.14 ~ 11.29
	파주열병합
	판교열병합	#1CC : 10.26 18:00 ~ 11.1
	평 택
	포스코	#16GT : 9.14 ~ 10.31
	화성열병합
	수원광교	#1CC : 9.30 ~ 11.2
	수완열병합	#1ST : 9.12 ~ 10.28 #1GT : 10.21 ~ 10.29
	오 성	#2GT : 10.17 12:00 ~ 11.3
	별내,세종,춘천
	위례열병합
	안 동
	양주,하남
	포천	#2GT : 10.7 ~ 11.1 #4GT : 10.7 ~ 10.22
	안산	#1CC : 10.7 08:00 ~ 10.25 18:00
	동두천
	대구그린파워
	아산배방	#1CC : 10.21 ~ 11.8
	명품오산
	파주문산
	포천천연	#2GT : 10.19 ~ 10.20 18:00
	부산정관
	영남파워
	동탄,수원,청주
	대전서부열병합
	대구열병합	#1CC : 10.23 ~ 10.29
기타(중앙)
제주지역		한림 #1CC: 9.16 ~ 12.24 제주복합#1 : 9.21 ~ 11.6 제주기력#3 : 10.16 ~ 12.1

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)