발전기별 예방정비 계획

('19. 12. 20)

◌ 대상기간 : 12.21 ∼ 12.29

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당	#1,2,3,4 : 12.20 13:00 ~ 12.22
	화 천	#2,3,4 : 12.21 09:00 ~ 24:00
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천
양수	무주양수
	산청양수
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.30 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.9.30	현대화사업
	양양양수
	예천양수	#1 : 11.2 08:00 ~ ‘20.2.9 #2 : 12.21 08:00 ~ 20:00
	청송양수	#1,2 : 12.28 08:00 ~ 12.29 24:00
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력
	대산복합
석탄	당 진	#2 : 9.9 ~ 12.22 #4,6 : 12.1 ~ ‘20.2.23
	보 령	#3 : ‘18.9.06 ~ ’20.02.16	성능개선공사
	신보령
	삼천포	#5 : ‘19.9.30 21:00 ~ ‘20.6.30 #6 : ‘19.10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수
	영 흥
	태 안	#5 : 11.30 20:00 ~ ‘20.2.23 #6 : 12.1 20:00 ~ ‘20.2.16
	하 동	#1 : 12.1 ~ ‘20.2.15
	삼척그린
	북 평
	호 남
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 15:00 ~ ‘20.6.30 24:00	연료전환 공사
원자력	고 리	#3 : ‘19.9.6 ~ ‘20.1.12 #4 : ‘19.7.9 ~ ‘20.1.6
	신고리	#3 : 11.20 ~ ‘20.2.11
	한 빛	#3 : ‘18.5.11 ~ ‘20.3.6 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.3.7
	한 울	#2 : ‘19.10.14 ~ ’20.1.3 #4 : 12.16 ~ ‘20.2.27 #5 : 9.25 ~ 12.30
	월 성	#3 : ‘19.9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성	#1 : 10.30 ~ 12.27

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울	#2CC : 12.16 09:00 ~ 12.28 24:00
	군 산
	보 령	#1GT : 9.16 ~ 12.25 #2GT : 9.8 ~ 12.25 #3GT : 9.18 ~ 12.24 #4GT : 9.1 ~ 12.24 #1ST : 9.16 ~ 12.25 #2ST : 9.23 ~ 12.24
	GS당진
	부 산	#1CC : 11.25 ~ 1.7
	부 천
	분 당	#2GT : 12.21 00:00 ~ 24:00
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌
	인 천
	인천공항
	일산복합	#1GT : 12.20 13:00 ~ 12.21 22:00
	파주열병합	#1GT : 12.21 ~ 12.22
	판교열병합
	평택/신평택
	포스코	#10GT : 12.22 08:00 ~ 22:00 #9CC : 12.22 01:00 ~ 14:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성
	세 종
	위례열병합
	안 동
	양주,하남
	포천
	안산
	동두천
	대구그린파워
	아산배방
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	부산정관
	영남파워
	춘천열병합	#1CC : 12.21 ~ 12.28
	동탄열병합	#2CC : 12.21 09:00 ~ 15:00
	수원열병합
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합	#1CC : 12.20 18:00 ~ 12.22 24:00
기타(중앙)
제주지역		한림#1GT,2GT : 12.23 16:00 ~ 12.24 18:00 한림#1ST : 12.23 14:00 ~ 12.24 18:00 한림#1CC : 9.16 ~ 12.23 13:00 12.26 09:00 ~ 18:00 제주복합#2 : 12.12 21:00 ~ ’20.1.11 12.00

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)