발전기별 예방정비 계획

('20. 2. 14)

◌ 대상기간 : 2.15 ∼ 2.23

구분	발전소	정지기간	비고
수력	강 릉	#1,2	휴지
	칠 보
	의 암
	청 평
	춘 천
	팔 당
	화 천
	대 청
	소양강
	안 동
	용 담
	임 하
	주 암
	충 주
	합 천	#1 : 2.1 ~ 7.31
양수	무주양수	#1,2 : 2.15 09:00 ~ 18:00
	산청양수	#1 : 2.15 09:00 ~ 18:00
	삼랑진양수	#1 : ‘18.9.10 ~ ’20.6.30 #2 : ‘18.9.10 ~ ’20.9.30	현대화사업
	양양양수
	예천양수	#2 : 2.22 08:00 ~ 20:00
	청송양수	#1,2 : 2.22 09:00 ~ 20:00
	청평양수
중유	울산화력
	평택화력	#3 : 2.20 07:00 ~ 2.20 22:00
	대산복합
석탄	당 진	#4 : ‘19.12.1 ~ ‘20.2.23 #6 : ‘19.12.1 ~ ’20.2.23 #9 : 2.21 13:00 ~ 17:00 #10 : 2.21 13:00 ~ 15:00
	보 령	#5 : ‘19.12.27 ~ ’20.3.1
	신보령
	삼천포	#5,6 : ‘19.10.1 ~ ‘20.6.30
	여 수
	영 흥
	태 안	#4 : 2.17 ~ 3.1 #5 : ‘19.11.30 ~ ‘20.2.23 #6 : ‘19.12.1 ~ ‘20.2.16
	하 동	#1 : ‘19.12.1 ~ ‘20.2.16 #2,3,5 : 2.10 ~3.1
	삼척그린	#1 : 1.23 11:00 ~ 2.26 11:00
	북 평
	호 남	#1 : 2.20 ~ 3.11
국내탄	동 해
	영 동	#2 : ‘18.10.31 ~ ‘20.6.30	연료전환 공사
원자력	고 리	#2 : ‘20.2.17 ~ ’20.5.13
	신고리	#3 : ‘19.11.20 ~ ‘20.3.4
	한 빛	#3 : ‘18.5.11 ~ ‘20.3.6 #4 : ‘17.5.18 ~ ’20.3.7
	한 울	#4 : ‘19.12.16 ~ ‘20.2.27
	월 성	#3 : ‘19.9.10 ~ ‘20.5.11
	신월성

구분	발전소	정지기간	비고
복합	광 양
	서 울	#1CC : 2.17 ~ 2.18 #2CC : 2.22 ~ 2.25
	군 산
	보 령	#3ST : 2.14 ~ 2.24
	GS당진
	부 산
	부 천
	분 당
	서인천
	송 도
	신인천
	안 양
	안양열병합
	영 월
	울 산
	율 촌	#2GT : 2.1 ~ 3.8
	인 천	#1CC : 2.15 ~ 2.18
	인천공항
	일산복합
	파주열병합
	판교열병합
	평 택	#2CC : 2.15
	신평택
	포스코	#4ST : 2.3 ~ 3.31 #7GT : 2.15 06:00 ~ 2.16 15:00 #6CC : 2.16 13:00 ~ 14:00 #8CC : 2.16 00:00 ~ 12:00
	화성열병합
	수원광교
	수완열병합
	오 성	#3GT : 2.22 ~ 2.23
	세 종
	위례열병합
	안 동
	양 주
	하 남
	포 천
	안 산
	동두천	#2CC : 2.16 08:00~ 20:00
	대구그린파워
	아산배방
	명품오산
	파주문산
	포천천연
	부산정관	#1CC : 2.22 09:00~ 16:00
	영남파워
	춘천열병합
	동탄열병합
	수원열병합
	청주열병합
	대전서부열병합
	대구열병합
기타(중앙)
제주지역		제주내연#1 : 1.20 ~ 3.3 한림#1GT : 2.14 ~ 2.15 한림#2GT : 2.17 ~ 2.18 한림#1ST : 2.15 09:00 ~ 13:00 한림#1ST : 2.18 16:00 ~ 20:00

※ 상기 발전기 정비계획은 전력수급상황에 따라 변경될 수 있습니다.

전력거래소 계통운영처 수급계획팀(☏061-330-8617)