공사감독자 배치기준(안) 공개

「건설기술 진흥법」제39조의2 및 국토교통부 고시 제2020-987호「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제8조 제3항 제1호에 따라 우리 기관의 「공사감독자 배치 기준(안)」을 붙임과 같이 공개하오니, 이에 대하여 의견이 있는 경우 2021. 04. 19.(월)까지 아래와 같이 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

□ 제출 의견

○ 공사감독자 배치기준(안)에 대한 의견(사유 포함, 별도양식 없음)

○ 제출자 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호

○ 기타 참고사항

□ 의견 제출 방법

○ 우편 제출 : 전라남도 나주시 빛가람로 625,

한국전력거래소 사옥관리팀

○ 전자메일 : csy3330@kpx.or.kr

※ 이 공개사항과 관련된 자세한 사항은 한국전력거래소 사옥관리팀 (전화 061-330-8268, 주임 최승연)로 문의하여 주시기 바랍니다.

2021년 04월 13일

한국전력거래소 이사장

공사감독자 배치 기준

1. 건축분야

가. 투입인원수 산정기준

업무분류체계			적용 수량 단위	기준인원수(인･일)	보정계수			난이도
단계	기본업무			고급	a	b	c
공통 업무	과업착수준비		식	7.0
	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영		식	20.5
	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	27.3
	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리		식	22.3				○
	사업정보관리시스템의 운영		운영 일수	0.3				○
	클레임 사전분석		식	31.0		○
	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계	식	27.3
		2)시공 이후 단계		54.6
설계전 단계	건설기술용역업체 선정		식	43.7
	사업타당성조사보고서의 적정성 검토		식	21.6				○
	기본계획보고서의 적정성 검토		식	21.3				○
	발주방식 결정 지원		식	31.0
	관리기준공정계획수립		식	18.0	○	○		○
	총사업비 집행계획수립지원(종합예산게획서)		식	11.4
기본 설계 단계	기본설계 설계자 선정업무 지원		식	17.1
	기본설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	8.4	○	○	○	○
	기본설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	22.5				○
	기본설계의 경제성(VE) 검토		식	90.6				○
	기본설계용역성과검토		용역 개월	8.8	○	○	○	○
	기본설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	3.7
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	6.8
	기본설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	2.5
실시 설계 단계	실시설계 설계자 선정업무 지원		식	13.9
	실시설계 조정 및 연계성 검토		용역 개월	18.4	○	○	○	○
	실시설계단계의 예산검증 및 조정업무		식	23.3				○
	실시설계의 경제성(VE) 검토		식	123.3				○
	실시설계용역성과검토		용역 개월	18.9	○	○	○	○
	실시설계 용역 기성 및 준공검사관리		회	8.1
	지급자재 조달 및 관리계획 수립		식	10.2
	각종 인허가 및 관계기관협의 지원		식	8.3
	실시설계단계의 기술자문회의 운영 및 관리ㆍ지원		회	6.4
	시공자 선정계획수립		식	16.9
구매 조달 단계	입찰업무지원		식	37.7
	계약업무지원		식	27.5
	지급자재조달지원		공사 개월	0.6	○		○
시공 단계	공사착수		식	72.7
	시공성과확인 및 검측업무		공사 일수	2.9	○	○	○	○
	사용자재의 적정성 검토		공사 개월	10.0	○	○		○
	품질시험 및 성과검토		공사 개월	12.6	○			○
	시공계획검토		공사 개월	8.8	○	○	○	○
	기술검토 및 교육		공사 개월	10.1	○			○
	공정관리		공사 개월	9.0	○	○		○
	안전관리		공사 개월	22.0		○		○
	환경관리		공사 개월	5.3		○		○
	설계변경 관리		공사 개월	7.5			○	○
	기성검사		회	6.6
	준공검사		식	3.8
	계약자간 시공인터페이스 조정		공사 개월	2.8	○
	하도급적정성검토		공사 년수	23.0				○
	시공단계의 예산검증 및 지원		회	36.4				○
	일반행정업무		용역 일수	1.6				○
시공후 단계	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인		식	13.6	○
	시설물 유지관리지침서 검토		식	32.6
	시설물유지관리 업체 선정		식	20.8
	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원		식	27.2

※ 시공단계 안전관리 보정계수 및 난이도는 1.0 이상만 적용

※ 적용 대상 업무는 건설공사의 특성에 따라 업무를 추가하거나, 제외하고 산정할 수 있음

나. 보정계수

분야	항목	보정계수 값
건축	a.건축용도	①단순공종 : 0.9 ②보통공종 : 1.0 ③복잡공종 : 1.1 (별표 1 제1호사목2)에 따라 공종 구분)
	b.공사성격	①신축 : 1.0 ②전면 리모델링(증축포함) : 1.1 ③순환 리모델링 : 1.2
	c.BIM적용여부	①미적용 : 1.0 ②적용 : 1.1

※ 여러 용도, 성격 등이 혼재된 경우 해당 공사비를 기준으로 가중평균한 값 적용

다. 공사난이도

구분		산식
총공사비 50억원이하 (시공단계만 해당)		․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+(건설사업관리기간보정계수+(0.5*골조공사비 비중)+0.2)*(총공사비*0.2) (※ 골조공사비 비중 = 골조공사비/총공사비)
총공사비 2,000억원 이하	시공 단계	․공사난이도=0.011*총공사비*(1-0.0025*총공사비)+건설사업관리기간보정계수 +(0.5*골조공사비 비중)+0.2 (※ 골조공사비중 = 골조공사비/총공사비)
	시공전 단계	․공사난이도 = 0.015*총공사비*(1-0.001*총공사비)
총공사비 2,000억원 초과		․공사난이도 = 총공사비 2,000억원 시 공사난이도+{(총공사비-200)/250}
비고		․공사비는 10억원 단위로 하며, 전기·통신·소방 공사비는 제외 ․건설사업관리기간보정계수 = {(평균건설사업관리기간-해당공사 건설사업관리기간)/평균건설사업관리기간}×0.1 ※건설사업관리기간 보정계수의 평균건설사업관리기간은 별표 2 제1호라목에서 직선보간법으로 도출