전력거래소 직장어린이집 건립공사

공사감독자 배치기준(안) 의견수렴

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부 고시 제2023-370호, 2023.6.30.)」제8조에 따라 전력거래소 직장어린이집 건립공사 공사감독자 배치기준(안)을 붙임과 같이 공개하여 의견을 수렴하고자 합니다.

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 전력거래소 직장어린이집 건립공사(증축)

○ 위    치 : 전남 나주시 빛가람로 625

○ 규    모 : 지상 1층 ~ 지상 2층, (연면적 : 981㎡)

○ 총공사비 : 4,288백만원

□ 공사감독자 배치기준(안)

○ 사업관리방식 : 직접 감독

○ 배치기준 : 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(국토교통부 고시 제2023-188호, 2023.4.7.)」 제9조 별표2 건설사업관리기술인 배치기준 “건축분야” 적용

□ 의견 제출 기간 : ’23. 7. 27. ~ ’23. 8. 2. (7일간)

□ 제출 방법 : 전자메일(psb8536@kpx.or.kr) 제출(별도 양식 없음)

□ 제출 의견 : 공사감독자 배치기준(안)에 대한 의견

2023년 07월 27일

한국전력거래소 이사장

[붙임]

공사감독자 배치 기준

1. 건축분야

가. 투입인원수 산정기준

단계	연번	기본업무		단위	적용수량	기준 인원수	보정계수			난이도	투입 인원수	비 고
							a	b	c
공 통 업 무 ①	1	과업착수준비		식	1	7.0					7.0
	2	건설사업관리 업무수행계획서 작성ㆍ운영		식	1	20.5					20.5
	3	건설사업관리 절차서 작성ㆍ운영		식	1	27.3					27.3
	4	작업분류체계 및 사업번호체계 관리, 사업정보축적ㆍ관리		식	1	22.3				0.35	7.8
	5	사업정보관리시스템의 운영		운영 일수	264	0.3				0.35	27.7
	6	클레임 사전분석		식	0	31.0		1.1			0
	7	최종 건설사업관리 보고	1)시공전 단계	식	0	27.3					0
			2)시공 이후 단계		1	54.6					54.6
시 공 단 계 ④	1	공사착수		식	1	72.7					72.7
	2	시공성과확인 및 검측업무		공사 일수	264	2.9	1.0	1.1	1.0	0.35	294.8
	3	사용자재의 적정성 검토		공사 개월	12	10.0	1.0	1.1		0.35	46.2
	4	품질시험 및 성과검토		공사 개월	12	12.6	1.0			0.35	52.9
	5	시공계획검토		공사 개월	12	8.8	1.0	1.1	1.0	0.35	40.7
	6	기술검토 및 교육		공사 개월	12	10.1	1.0			0.35	42.4
	7	공정관리		공사 개월	12	9.0	1.0	1.1		0.35	41.6
	8	안전관리		공사 개월	12	22.0		1.1		1.0	290.4
	9	환경관리		공사 개월	12	5.3		1.1		0.35	24.5
	10	설계변경 관리		공사 개월	12	7.5			1.0	0.35	31.5
	11	기성검사		회	1	6.6					6.6
	12	준공검사		식	1	3.8					3.8
	13	계약자간 시공인터페이스 조정		공사 개월	12	2.8	1.0				33.6
	14	하도급적정성검토		공사 년수	1	23.0				0.35	8.1
	15	시공단계의 예산검증 및 지원		회	1	36.4				0.35	12.7
	16	일반행정업무		용역 일수	264	1.6				0.35	147.8

단계	연번	주요업무	단위	적용수량	기준 인원수	보정계수			난이도	투입 인원수	비 고
						a	b	c
시 공 후 단 계 ⑤	1	종합시운전계획의 검토 및 시운전 확인	식	0	13.6	1.0				0
	2	시설물 유지관리지침서 검토	식	0	32.6					0
	3	시설물유지관리 업체 선정	식	0	20.8					0
	4	시설물의 인수ㆍ인계 계획 검토 및 관련업무 지원	식	1	27.2					27.2
투입인원수 합계			(①+④+⑤)			144.9(①) + 1150.2(④) + 27.2(⑤)
			시공단계 20% 감			144.9(①) + 920.6(④) + 27.2(⑤)
						1,092.7인‧일 / (공사감독 1,150.6인‧일)

※ 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준, [별표2]」에 따라 감독 권한 대행 등 건설사업관리가 아닌 경우에는 시공단계 투입인원수에서 20%를 감하여 산정

2. 공사감독자 배치 계획

구분	등급	시공 단계(12M)												계 (A)	환산비 (B)	적용 인·일 (A×B)	비고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
건축1	특급	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	1.156	305.2
건축2	특급	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	1.156	305.2
건축3	초급	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	0.659	174.0
토목	특급	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	1.156	366.2	기술사
계																1,150.6