[IESO 휴전 제출 절차]

※ Market Manual 7: System Operations Part 7.3: Outage Management에서 1.3.2 Outage Submission Methods, 1.3.3 Timelines, 2. Procedural Work Flow, 3. Procedural Steps을 발췌하여 요약한 것임.

작성 : 송전망 운영팀  손 정 국(6984)

1. 휴전 제출 방법

시장참여자들은 휴전을 확인하고 제출할 때 다음 의사전달 방법을 선택한다.

IESO 또한 휴전 제출 수령을 확인하고 시장참여자들에게 다시 승인 의사전달을 할 때 같은 방법을 사용한다.

의사전달 방법은 아래와 같다 :

· IOMS

· IESO 웹사이트의 "Outage Request" IMO-FORM-1360양식을 이메일로 보냄.

1.1 통합 휴전 관리 시스템(IOMS)

시장참여자들은 여러 휴전을 다루고 자신들만의 휴전 관리 프로그램을 가지고 있으며 IESO에서 제공되는 IOMS 온라인 시스템으로 휴전요청양식을 제출한다. 시장참여자들은 Application program interface (API)를 통해 자신들의 소프트웨어와 IOMS를 연계한다. 요청 시 IESO가 IOMS API의 설명서를 제공한다. 이 시스템을 사용하는 시장참여자들은 전자 "outage slip"을 완성하여 IESO에 제출한다. IESO는 IESO-controlled grid에 있어 계획 휴전의 영향을 평가하기 위해 outage slip을 검토한다. Figure 1-1는 IOMS 구성요소의 다이어그램이다.

시장참여자

인터페이스

브라우져

수동 기입

형식

시장참여자

휴전

프로그램

IESO 지원

프로그램

인터페이스

IOMS

생산

데이터베이스

EMS

휴전

스케쥴러

IOMS

품질보증

데이터베이스

IESO

웹

서버

Figure 1-1 : IOMS 구조

IESO 웹서버의 휴전 데이터는 다음 두 데이터베이스로 저장된다. : IOMS production database and IOMS quality assurance database

실제 데이터의 손상 위험 없는 인터페이스 소프트웨어를 테스트하고자 하는 시장참여자들은 Quality Assurance database을 사용할 수 있다. Databases는 휴전 일까지 유지되고 휴전 관리 기록으로 간주된다.

1.2 IESO 웹사이트 휴전 요청 양식

시장참여자들은 IESO 웹사이트 IMO-FORM-13602에 있는 "Outage Request"을 이메일을 통해 제출한다. (Guide IMO-GDE-0058: “Outage Request Form - A Market Participant Guide”에 휴전요청 정보가 명시됨.)

IOMS을 통해 직접적으로 연결되지 않은 사용자들을 위해서나 문제점을 언급하는 경우에 이 형식을 작성하여 IESO에 제출한다. IESO는 IOMS에 제출된 정보를 입력하고 시장참여자들에게 이메일을 통해 공지한다. 시장참여자들은 전화상으로 사전 승인을 받거나 휴전요청이 거부됨을 통보 받는다. 다음 표는 IESO와 시장참여자간의 휴전절차 웹 양식 절차를 나타낸다.

휴전 제출

개정하기 위한 휴전반환

시장 참여자

IESO

IESO 웹 형식에

새로운/수정된

휴전요청 생성

기존 휴전요청 개정

휴정요청 접수

휴전요청 확인,

사전승인 전에

휴전요청 취소

이후 휴전요청 (요청 형태 : 변경된 휴전요청 선택) :

• 이전 휴전ID#입력

휴전제출서 미완성

Comment : IESO가 미완성 Section을 지시

휴전제출서를 받아들임:

• 휴전ID할당

• 날짜/시간 기입

IESO는 확인이나 취소를 접수  받는다.

IESO는 변경분을 접수 받는다.

재계획:(최소30분 초과 지연되어 승인되지 않을 것 같은 휴전)

계획 연장

IOMS에 휴전 입력됨.

휴전 승인

확인, 취소제출

변경 제출

IOMS에 변경분 입력

확인(취소)

IOMS에 입력

주의 : 모든 다른 조치들은 IESO와 시장참여자 사이에 전화상으로 만들어진다.

Figure1-2 : IESO Web Form 행동절차

2. 스케줄

일반적으로 시장참여자는 휴전요청 양식을 휴전계획 시작일 최소 33일 전에 IESO에 제출해야 한다.

또한, 장기 휴전 계획(5일 이상 휴전)이 요구되는 송전설비나 발전기는 최소 3달 전에 알려야 하며 중기 휴전 계획(4시간 이상 휴전)이 33일과 3달 사이에 발생할 경우 사전에 알려야 한다.

장비를 검토하고 조작하기 위한 휴전계획 요청 양식은 적어도 휴전계획 4일 전에 IESO에 제출해야 한다.

송전설비나 발전기는 정보의 정확성을 유지하도록 잦은 업데이트가 요구된다. 2일전 승인을 요청하고자 하는 시장참여자는 휴전 시작 전 33일 이후, 적어도 휴전 시작일 3일 전 동부시간 10:00까지 휴전을 진행하는 목적을 IESO와 확인해야 한다.

IESO는 Section 1.3.5.4.1 (Ch 5, S. 6.2.2)에 명시된 대로 시장참여자들에게 14일 이전에 승인을 준다. 시장참여자는 계획휴전 시작 전 21~33일 사이에 IESO와 휴전을 확인해야 한다.

IESO가 운영하는 망의 신뢰도에 대한 휴전이 미치는 영향을 기초로 하여 IESO는 사전 승인을 제공할 것이다. 휴전이 IESO의 망 신뢰도에 영향을 준다면 IESO는 그 휴전이 위험하다고 인식하고 승인 마감일까지 휴전을 거부한다.

계획 휴전을 시작하기 전에 시장참여자는 계획된 시간에 휴전을 진행하는 목적을 IESO에 알려야 한다. 그러함으로써 IESO가 휴전 시작 전에 휴전의 상황들을 반영하게 된다. 시장참여자는 휴전을 진행하는 준비가 될 때 IESO와 연락한다. IESO는 휴전하도록 설비운영을 지시 할 때 최종승인을 하고 그 동시에 시장참여자에게 알린다.

시장참여자는 다음 계획 휴전 마지막 날에 휴전에서 복귀 허락을 요청해야 한다. 휴전 연장은 사전에 요청되어야 하며 3일전 10:00 이후에 요청될 경우 Short Notice Requests (SNRs)에 따라 IESO에게 평가받는다.

3달 전까지

33일 전까지

21일전 동부시간10:00까지

휴전 이전 14일 마지막 날 동부시간14:00까지

10일 이전까지

3일전 동부시간 10:00까지

2일전 동부시간 14:00까지

휴전일 한시간 전까지

5일 이상 송전설비나 발전기 휴전알림

4시간 이상 송전설비나 발전기 휴전알림

14일전 승인 휴전요청 확인

IESO는 14일전 승인에 맞는 사전승인을 하며 14일전 승인이 받아들여지지 않으면 휴전은 2일전 승인으로 자동 간주된다.

제출된 휴전계획 전력 계통 검토

Short Notice Requests (SNRs)인 2일전 승인에 대한 MP(시장참여자)의 확인, 휴전계획 연장

IMO가 사전승인을 주거나 휴전을 거부.

-MP가 휴전을 시작하기위한 최종승인 요청

-휴전이 시작되기 위한 IMO의 최종승인

휴전시작

-계획된 연장-양식 제출

-강제 연장-전화상으로

-MP가 IMO에 휴전복귀를 알림

(신뢰도 영향을 검토)내부적

표 1-3. 휴전제출과 승인 스케줄

요청서 제출

장기 휴전(5일 이상)

3달 전까지

중기 휴전(4시간 이상)

33일 전까지

확인

확인

21일전

거부

휴전 미승인

최종승인(1시간 전)

휴전 시작

거부

승인 14일 전

승인 2일 전

3. 작업흐름 절차

3.1 휴전 처리 절차

다음 표는 시장참여자, IESO, 다른 사업자들 사이에 계획 휴전의 처리와 관련된 정보 흐름을 나타낸다.

표2-1이 나타내는 단계들은 Section 3, Table 3-1에서 자세히 설명한다.

제목	설명
Oval	일을 시작하거나 완료하는 경우. 시작과 완료는 (01에서99까지)절차 안에 차례로 번호가 부여된다.
Task Box	참조번호를 보여줌. 일을 수행하는 책임 있는 당사자의 참조번호와 작업이름을 보여주거나 일은 간략 설명. 참조번호(예 1A02)는 현재 “시장 매뉴얼”(1), 보조절차식별(적용될 시)(A), 작업번호(02)안에 절차번호를 나타낸다.
Solid horizontal line	IESO와 외부 사업자 사이의 정보 흐름을 나타낸다.
Solid vertical line	작업들 사이의 연결을 보여준다.
Broken line	진행되는 일 혹은 성공된 일의 시작과 완료를 링크한다.

시장 참여자

IESO

01

설비/장비 휴전을 수행할 목적

3.02

3.01

IESO 웹이나 IOMS에 휴전제출서 생성

3.03

시장참여자가 휴전계획을 수정

3.04

3.06

3.05

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

IESO는 휴전제출서를 검토. 요청이 승인될 것 같으면 시장참여자에게 알림.

시장참여자가 휴전제출을 웹양식이나 IOMS에서 확인하거나 취소 혹은 재조정

시장참여자가 재조정, 취소하거나 강제휴전

IESO가 휴전제출을 검토하고 사전승인을 주거나 거부.

시장참여자가 IESO에 연기를 알림

시장참여자가 휴전을 시작하기위한 최종승인을 요청

시장참여자가 연기, 취소 혹은 강제휴전을 함.

IESO가 휴전요청 최종검토를 하고 최종승인을 하거나 사전 휴전을 취소

시장참여자가 휴전을 시작;IESO에 알림.

02

3일전 동부시간 10:00까지

03

․ 2일전 동부시간 14:00까지

․ 계획된 전력시스템 시험 10일전까지

04

대략15분~1시간전

05

계속

휴전 재조정

휴전 재조정

승인되지 않을 것같은 휴전

휴전 확인

최소 30일이상

최소 30일미만

강제 휴전

휴전 거부

휴전 사전 승인

휴전 연기

휴전 취소

강제 휴전

최종 승인 제공

휴전에서 복귀하는 허락을 시장참여자 요청 혹은 연장요청

시장 참여자

IESO

시장참여자가 휴전을 시작하기위한 최종승인을 요청

시장참여자가 계통으로 복귀하거나 강제연장;IESO에 알림

05

계속

요구되면 IESO는 휴전/검토를 조정한다.

휴전에서 복귀나 연장 요청을 IESO가 검토

시장참여자가 휴전을 시작하기위한 최종승인을 요청

06

휴전 완료

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

휴전 연장

강제 연장

계통으로 복귀

4. 절차 단계

이 section은 휴전 조치 절차를 구성하는 세부 일정표를 보여주며 아래는 표의 내용을 나타낸다.

Ref.

Section 2로부터 작업 참조번호.

Task Name

Section 2에 참조되는 작업 이름.

Task detail

책임지역을 포함한 작업에 대한 정보.

When

작업이 요구될 시점에 대한 정보.

Resulting information

관련된 IESO 서신을 포함하여 작업 정보 리스트.

Method

작업 완료 양식과 방법.

Completion events

작업이 완료될 모든 상황의 리스트.

4.1 휴전 처리 절차

다음 표에 나타나는 단계들은 Section 2, Figure 2-1에 설명되어 있다.

표3-1: 휴전계획과 스케줄링에 대한 절차단계

Ref.	Task Name	Task detail	When	Resulting information	Method	Completion events
3.01	IESO웹 양식이나 IOMS에 휴전제출서 생성	시장참여자들이 “Outage Request"양식이나 Integrated Outage Management System(IOMS)에서 휴전제출서를 생성하고 IESO에 제출. IESO는 IOMS에 제출되는 과정을 기초로 모든 정보를 입력.	휴전 시작일의 최소 33일 이전. 4시간~5일사이의 휴전에 대한 요청서는 휴전시작일 3달전 안에 가능한 빨리 작성해야 한다. 5일이상의 휴전은 휴전시작일 최소 3달전에 가능한 빨리 요청해야 한다.	시장참여자는 웹양식이나 IOMS에 다음과 같은 휴전정보를 기입. • 시장참여자 이름 • 휴전타입 • 단일 접속점이나 책임 위치 • 설비/장소 • 날짜와 시간 • 리콜 시간 • 주기적 순환 • 설명/목적/의견 • MW 영향 • MVAR 영향 • 연기/취소 비용	IESO 웹 양식 IOMS	IOMS지원상태를 “New Submission"로 놓음.

Ref.	Task Name	Task detail	When	Resulting information	Method	Completion events
3.02	IESO가 휴전제출서를 검토. 웹양식으로 요청이 제출되면 IESO는 휴전ID를 시장참여자에게 알림.	IESO는 휴전요청의 최초 검토를 함. 요청이 승인되지 않을 시 시장참여자에게 알림. 위험한 계통변경 상태에 놓이면 시장참여자에게 알림.	휴전제출서를 받은 시점이나 33일 평가 시간동안 안정도와 적정도 평가가 완료되었을 시점.	휴전이 거부되거나 위험을 초래할 경우 시장참여자에게 알림.	IESO가 전화로 알리고 이메일을 통해 IOMS이나 IESO웹양식에 입력.	시장참여자에게 알림.
3.03	시장참여자가 휴전계획을 수정.	IESO가 휴전요청이 승인되지 않을 것으로 간주하면 시장참여자가 좀더 적절한 시간으로 휴전을 재조정함.	IESO가 제출된 휴전요청이 승인되지 않을 것으로 평가한 후.	시장참여자가 승인서를 수정 제출하거나 어떠한 조치도 취하지 않음.	IESO가 전화나 이메일로 통보. 시장참여자는 IESO웹 양식이나 IOMS에 업데이트.	새로운 시작/완료 날과 시간을 시장참여자가 IOMS시스템에 입력하거나 수정된 웹양식을 제출. 기존 휴전요청의 수정 본은 기존 휴전 ID를 포함.
3.04	시장참여자가 IESO웹 양식이나 IOMS에서 휴전제출서를 확인하거나 휴전을 취소 또는 재조정.	명시된 휴전 제출 절차에 따른 목적을 확인하기 위해 시장참여자는 IESO에 연락.	기존 요청 제출과 휴전 시작 3일전 동부시간 10:00사이 시간.	시장참여자가 휴전제출 절차에 따른 행동 확인; 연기, 취소 휴전 리콜에 대한 비용확인.	IESO웹 양식 IOMS	IESO가 휴전절차에 따른 목적 확인.

Ref.	Task Name	Task detail	When	Resulting information	Method	Completion events
3.05	IESO가 휴전 제출서를 검토하고 사전승인이나 요청거부를 알림.	IESO는 휴전기간 동안 IESO가 운영하는 망의 SAA 기준으로 휴전 사전승인을 하거나 휴전요청을 거부.	휴전 시작2일 전 동부시간 14:00까지	시장참여자는 사전승인이나 거부를 받음.	IOMS 전화	IOMS에 “Advanced Approval"상태로 놓임.
3.06	시장참여자가 재조정, 취소나 강제 휴전 함.	IESO가 요청 시작/완료시간을 기초로 휴전요청을 거부하면 IESO는 적절한 휴전 재조정을 시장참여자와 협의.	휴전요청이 거부된 시점	새로운 휴전 시작/완료 날짜	최초 전화로 통보. 시장참여자는 IESO웹 양식이나 IOMS에 변경분을 업데이트.	시간을 변경하거나 취소 또는 강제휴전을 하도록 휴전 제출서를 시장참여자가 IOMS에서 수정.
3.07	시장참여자가 IESO에 지연 알림.	30분 미만 연기 : 휴전이 정시는 아니지만 30분 안에 시작.	휴전이 계획에 없음.	IESO는 휴전 시작시간 안에 지연 공지를 받음.	전화상	IESO는 휴전시작 시간 안에 연기를 알게 된다.
		30분 초과 연기 : 휴전이 최소 30분동안 시작하지 않음.	휴전이 계획에 없음.	IESO는 휴전 시작시간 안에 지연 공지를 받음.	전화상 시장참여자가 IOMS나 IESO웹 양식에 있는 휴전요청서에 시작시간을 업데이트 .	IESO는 휴전시작 시간 지연을 인식.

Ref.	Task Name	Task detail	When	Resulting information	Method	Completion events
3.08	시장참여자가 휴전을 시작하기위해 최종승인을 요청.	휴전시작하기 전에 시장참여자는 최종승인을 위해 IESO와 연락.	휴전 시작 일과 시간 전	IESO는 임박한 휴전 공지를 받음.	전화	IESO는 휴전을 시작하려는 시장참여자의 목적을 인식.
3.09	IESO는 휴전요청의 최종검토를 마치고 최종승인을 제공하거나 사전승인을 취소.	SAAs의 최종검토와 현 전력계통의 상태를 기초로 IESO는 휴전 최종승인을 하거나 사전승인을 거부.	휴전 최종승인을 받고자하는 시장참여자의 전화를 받은 시점	시장참여자는 휴전을 시작하기위한 최종승인 공지를 받거나 IESO의 휴전취소 공지를 받음. IESO가 휴전을 거부하면 IESO는 시장참여자가 연기할 시간틀을 제공.	시장참여자가 전화로 공지받음. IOMS에서 승인 또는 거부.	IOMS에 휴전 승인 또는 거부상태를 명시. 시장참여자는 IESO 결정을 전화로 통보받음.
3.10	시장참여자가 연기, 취소 또는 강제휴전 함.	IESO가 휴전을 거부하면 시장참여자는 연기, 취소 또는 강제 휴전될 휴전제출서를 수정.	IESO가 휴전 사전승인을 취소하면	IOMS의 휴전제출서가 수정됨.	전화상IOMS	IOMS의 휴전제출서가 수정됨. 시장참여자가 수정을 수행.
3.11	시장참여자가 휴전을 시작하고 IESO에 공지.	시장참여자는 휴전이 시작되고 설비를 휴전한다는 것 등을 알리기 위해 IESO와 연락.	IESO가 최종승인을 하거나 시장참여자가 강제휴전을 하면	시장참여자의 급박한 휴전시작	전화상	IESO Control Centre는 휴전이 시작됨을 인식.

Ref.	Task Name	Task detail	When	Resulting information	Method	Completion events
3.12	IESO는 휴전/검토 조정.	시장참여자가 계통설비 검토에 참여할 때, IESO는 신뢰도 측면으로 활동을 조정하도록 요구.	휴전/시험 동안	IESO가 휴전동안 시장참여자에게 지시.	전화상 IOMS	휴전 끝 혹은 조정이 요구되는 활동시험
3.13	시장참여자가 설비이용 허락을 요청하거나 휴전연장을 요청	시장참여자는 IESO가 신뢰도 영향을 검토하도록 설비이용 허락을 요청해야 함. 설비이용을 못하면 시장참여자는 IOMS에 휴전연장을 요청하거나 IESO 웹양식에 새로운 휴전 요청서를 제출.	휴전완료 이전; 휴전연장을 요청하려면 시장참여자는 가능한 한 빠른 시일에 해야 함.	시장참여자가 요청	전화상 IESO웹 양식 IOMS	IESO가 요청서를 검토. IESO와 시장참여자가 IOMS에 새로운 휴전기록을 처리

Ref.	Task Name	Task detail	When	Resulting information	Method	Completion events
3.14	IESO가 휴전에서 복귀를 요청하거나 휴전연장을 요청.	IESO는 휴전완료나 연장으로 인한 신뢰도 영향을 평가. IESO는 실제 휴전완료 시간을 입력하고 “submitter complete"라고 기입. 그리고 나서 IESO는 새로운 휴전제출서를 기초로 휴전연장을 승인이나 거부.	휴전완료 전	IESO의 평가와 휴전에서의 결정	전화 IOMS	IESO가 IOMS에 휴전 기록을 업데이트.
3.15	시장참여자가 휴전을 계속함.	시장참여자가 휴전을 계속함.; 새로운 휴전기록이 생성되어야 하고 IOMS에 승인되어야 함.	IESO의 승인을 받은 시점 혹은 시장참여자가 강제 연장을 한 경우	IESO가 계속되는 휴전을 인식.	IOMS 또는 IESO웹 양식	시장참여자가 휴전에서 복귀 허락을 요청하거나 휴전연장을 요청할 때
3.16	시장참여자가 휴전에서 복귀하거나 강제 연장을 함.; IESO에 알림.	시장참여자가 계통에 설비를 다시 이용하도록 하거나 강제휴전 연장을 IESO에 알림.	계획휴전 완료, IESO가 계통에 설비 복귀를 알릴 시점에 휴전연장을 거절하거나 휴전을 리콜.	휴전완료나 강제연장으로 계속	전화상IOMS	휴전완료나 강제 연장
3.17	IESO가 휴전을 리콜	IESO가 신뢰도 문제 때문에 계통에 설비복귀를 명령.	SAA가 휴전이 신뢰도 문제를 만족하도록 리콜되어야 한다는 것을 결정할 때	시장참여자는 만족되는 리콜시간에 계통으로 설비를 복귀시키거나 강제 휴전연장 함.	전화상	휴전 완료.