준공년	준공월	발전사명	발전소명	발전원	설비용량 (MW)	발전소 위치	추진현황 (‘12.7 기준)
2013	1	남부발전	KnH솔라	태양광	10	전북 군산	건설 중
2013	1	SK E&S	경남창원 태양광	태양광	3	경남 창원	실시 설계중
2013	1	SK E&S	오성 연료전지	연료 전지	2.8	경기 평택시	기본 설계중
2013	1	남부발전	부산솔라	태양광	10.8	부산시내 9개소	건설 중
2013	1	남부발전	JN솔라#1	태양광	10	전남	타당성 검토중
2013	1	SK E&S	충북증평 태양광	태양광	1	충북 증평군	사업허가 준비중
2013	1	SK E&S	충북청주 태양광	태양광	2	충북 청주시	사업허가 준비중
2013	3	동서발전	일산 연료전지	연료 전지	2.8	경기 일산	사업허가 준비중
2013	3	서부발전	화순풍력	풍력	20	전남 화순군	설계기술용역착수 ('11.10)
2013	3	POSCO에너지	신안파워2호태양광	태양광	5	전남 신안군	송전용 전기설비이용계약체결
2013	4	POSCO에너지	부산RDF 발전사업	폐기물	25	부산 생곡동	건설중
2013	5	남부발전	NBP솔라#1	태양광	18.4	부산 강서	타당성 검토중
2013	5	동서발전	울산 연료전지	연료 전지	2.8	울산화력본부	사업허가 준비중
2013	6	한수원	영월태양광	태양광	40	강원 영월	사업추진 기본계획 수립중
2013	6	한수원	서울태양광	태양광	10	서울 성동구	타당성 검토중
2013	7	동서발전	동해 바이오매스	바이오	30	강원도 동해시	옥외기기 기초 및 순환수관 설치중
2013	7	남동발전	영흥풍력 2단지	풍력	22	인천시 옹진군	기본설계 실시중
2013	9	남부발전	삼척 연료전지	연료 전지	28	강원도 삼척시	타당성 검토 중
2013	10	서부발전	바이오 중유혼소	바이오	40	경기도 평택시	추진중
2013	10	애니콘	청사풍력	풍력	15	부산시 해운대구	풍향 조사준비
2013	10	POSCO에너지	탐라 해상풍력I	풍력	12	제주시 한경면 해상	입지확보, 개발사업시행 승인 변경인가
2013	12	남부발전	평창풍력	풍력	30	강원 평창군
2013	12	남부발전	정암풍력	풍력	40	강원도 정선군	SPC 설립준비중
2013	12	남부발전	태백Ⅱ 풍력발전	풍력	22	강원도 태백시	사업추진방안 협의중
2013	12	남부발전	JN솔라#2	태양광	17	전남	검토 중
2013	12	동서발전	경주풍력 (2단계)	풍력	20	경주시 양남면	사업허가 준비중
2013	12	동서발전	대기리풍력	풍력	24	강릉시 왕산면	사업허가 준비중
2013	12	서부발전	평택발전 본부태양광	태양광	0.27	경기도 평택시	그린파워 프로젝트
2013	12	서부발전	서인천발전본부태양광	태양광	0.4	인천시 서구	그린파워 프로젝트
2013	12	서부발전	영암F1경기장2단계태양광	태양광	6	전라남도 영암군	계획중
2013	12	서부발전	신규태양광	태양광	25		계획중
2013	12	중부발전	상명풍력	풍력	21	제주시 한림읍	사업허가 진행중
2013	12	한수원	경기 그린에너지	연료 전지	58.8	경기도 화성시	추진중
2013	12	한수원	부산풍력	풍력	10	부산시 사하구	사업검토단계
2013	12	POSCO에너지	포항부생(I)	부생 가스	150	경북 포항	건설중
2014	1	POSCO에너지	포항부생(II)	부생 가스	150	경북 포항	건설중
2014	1	서부발전	바이오 콜혼소	바이오	115	충남 태안군	추진중
2014	2	애니콘	한남태양광	태양광	18	제주시 서귀포시	주민 협의중
2014	3	SK E&S	원동풍력	풍력	20	경남 양산시 원동면	실시계획 인가서류 준비 중
2014	3	동서발전	당진 제2소수력	수력	3	당진화력본부	착공 중
2014	3	애니콘	한산,비금도풍력발전	풍력	15	경남 거제 비금도 인근	주민 협의 중
2014	3	SK D&D	가시리풍력	풍력	30	제주도 서귀포시 표선면 가시리	풍력지구지정협의 완료 후 발전사업허가 추진예정
2014	5	남부발전	NBP솔라#2	태양광	10.4	부산시 강서구	검토 중
2014	5	중부발전	원주그린	폐기물	10	강원도 원주시 지정면	시공중 (파일항타준비)
2014	6	인천광역시	에코아일랜드 태양광	태양광	3	인천시 옹진군	타당성 검토 중
2014	6	인천광역시	에코아일랜드 풍력	풍력	2	인천시 옹진군	타당성 검토 중
2014	6	남부발전	단양풍력	풍력	30	충북 단양군
2014	6	서부발전	바이오(PKS,우드펠렛)혼소	바이오	100	충남 태안군 태안발전본부	추진중
2014	6	한수원	서울 연료전지(I)	연료 전지	30	서울 마포구 상암동	타당성 검토 중
2014	6	한수원	서울 태양광(II)	태양광	10	서울 마포구 상암동	타당성 검토 중
2014	6	STX에너지	영양풍력	풍력	46	경북 영양	발전사업허가취득
2014	6	POSCO에너지	신안파워3호태양광	태양광	5	전남 신안	입지확보완료, 송전용전기설비이용계약체결
2014	8	SK E&S	밀양풍력	풍력	36		실시계획 인가서류 준비 중
2014	8	동서발전	양산풍력 (1단계)	풍력	20	양산시 상북면	발전사업 허가준비
2014	8	동서발전	양산풍력 (2단계)	풍력	30	양산시 원동면	발전사업 허가준비
2014	8	동서발전	영천보현산풍력	풍력	34	영천시 화북면	풍황자원 조사완료
2014	8	동서발전	포항성법령풍력	풍력	40	포항시 북구 신광면	풍황자원 조사완료
2014	8	동서발전	포항장기곶풍력	풍력	20	포항시 남구 장기면	풍황자원 조사완료
2014	9	글로벌에너지개발	논산바이오열병합	바이오	20	충남 논산시 은진면	부지 매입, 사업허가추진중
2014	9	동서발전	수도권매립지태양광	태양광	10	경기도 김포시	후보지점확보
2014	9	서부발전	장흥풍력	풍력	20	전남 장흥	부지확보 추진중 (현재)
2014	10	동서발전	울산동대산풍력	풍력	40	울산 북구	풍황자원 조사중
2014	10	중부발전	양구풍력	풍력	20	강원도 양구	사업허가 진행중
2014	10	POSCO에너지	탐라 해상풍력II	풍력	18	제주시 한경면	입지확보, 개발사업시행 승인 변경인가
2014	12	동성	안인1차풍력	풍력	40	강원도 강릉시	-
2014	12	남부발전	무주풍력	풍력	30	전북 무주군 무풍면
2014	12	남부발전	봉화풍력	풍력	60	경북 봉화군
2014	12	남부발전	대정Ⅰ 해상풍력	풍력	84	제주 서귀포 대정읍
2014	12	남부발전	김천바람재풍력	풍력	20	경북 김천시 대항면 일원	주주협약 및 SPC 설립준비중
2014	12	남부발전	신월성풍력	풍력	40	경주 감포읍 대본리 일원	타당성 검토 중
2014	12	남부발전	안동황학산	풍력	20	경북 안동시 백자리	풍황 측정중
2014	12	남부발전	영덕삿갓봉풍력	풍력	20	경북 영덕군 영덕읍 창포리 일원	경제성 확보방안 검토중 (저풍속)
2014	12	남부발전	영덕화천리풍력	풍력	20	경북 영덕군 영덕읍 화천리 일원	풍황자료 취득
2014	12	남부발전	삼척육백산풍력	풍력	40	강원도 삼척시 도계읍	풍황 측정중
2014	12	남부발전	거제풍력	풍력	40	경남 거제시 일운면 일원	풍황 측정중
2014	12	남부발전	JN솔라#3	태양광	10	전남도시군	타당성 검토중
2014	12	동서발전	대성산풍력	풍력	34	화천군 상서면	풍황자원 조사완료
2014	12	동서발전	임계풍력	풍력	50	정선군 임계면	풍황자원 조사완료
2014	12	동서발전	정선풍력	풍력	20	강원도 정선군	환경평가, 산지전용 허가신청
2014	12	동서발전	제주풍력	풍력	20	제주도 서귀포시	풍황자원 조사중
2014	12	동서발전	포항대보면풍력	풍력	40	포항시 남구 대보면	풍황자원 조사중
2014	12	서부발전	청주통합정수장태양광	태양광	2.26	충북 청주시 상당구	MOU체결, 타당성 조사완료
2014	12	서부발전	여동풍력	풍력	20	충북 영동군 황악산 및 곤천산 일원	MOU체결, 타당성 조사
2014	12	서부발전	신규 연료전지	연료 전지	10		계획중
2014	12	한수원	청송풍력	풍력	90	청송군	풍황계측 준비
2014	12	MPC율촌	MPC율촌복합연료전지3	연료 전지	5.6	율촌복합발전소 부지내	-
2014	12	MPC율촌	태양광발전소	태양광	0.22	율촌복합발전소 부지내	-
2015	1	디엠에스	보성	풍력	20	전남 보성	타당성 조사 시행
2015	1	디엠에스	화순	풍력	20	전남 화순	타당성 조사 시행
2015	2	글로벌에너지개발	경기 남부바이오열병합	바이오	20	경기도 이천시 부발읍	발전사업 인허가 취득
2015	3	POSCO에너지	전남5GW풍력발전육상1차사업	풍력	200	전라남도 신안군 일대	타당성 조사 시행
2015	4	남부발전	NBP솔라#3	태양광	15.1	부산시 강서구	검토 중
2015	6	한국풍력주식회사	서남해 해상 풍력실증	풍력	100	전북부안군위도~전남영광군안마군도일원	공유수면 사용 허가 준비
2015	6	남부발전	진안 장수풍력	풍력	30	전북 진안
2015	6	동서발전	광양항 태양광	태양광	37	전남 광양	후보지점 확보
2015	6	한수원	서울태양광 (III)	태양광	10	서울 중랑구	타당성 검토 중
2015	6	한수원	서울 연료전지(II)	연료 전지	30	서울 마포구	타당성 검토 중
2015	6	SK D&D	현종산풍력	풍력	60	경상북도 울진군	풍황계측기 설치
2015	8	동서발전	군위풍력	풍력	40	군위군 고로면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	경주풍력 (3단계)	풍력	20	경주시 산내면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	김천풍력	풍력	30	김천시 증산면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	봉화풍력 (1단계)	풍력	40	봉화군	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	봉화풍력 (2단계)	풍력	20	봉화군	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	부산풍력	풍력	20	부산시 정관면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	삼척풍력	풍력	40	삼척시 하장면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	양양풍력	풍력	20	양양군 헌남면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	영광풍력	풍력	40	영광군 대마면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	영양풍력 (1단계)	풍력	40	영양군 영양읍	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	영양풍력 (2단계)	풍력	40	영양군 영양읍 무학리	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	영양풍력 (3단계)	풍력	40	영양군 석보면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	울산풍력	풍력	30	울산시 울주군	풍황계측기 인허가신청
2015	10	동서발전	장성풍력	풍력	40	장성군 삼계면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	태백풍력	풍력	40	태백시 삼수동	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	하동풍력	풍력	30	하동군 화개면	풍황자원 조사중
2015	10	동서발전	화천풍력	풍력	40	화천군 상서면	풍황자원 조사중
2015	10	한수원	서울연료전지(III)	연료 전지	30	서울 마포구 상암동	타당성 검토 중
2015	11	서부발전	태안IGCC	IGCC	300	충남 태안군	착공 ('11.11)
2015	12	인천	에코아일랜드 조류	조류	5	인천시 옹진군	타당성 검토 중
2015	12	동성	예미풍력	풍력	40	강원도 정선군	풍황측정중
2015	12	한라풍력	제주동부 해상풍력	풍력	105	제주도 제주시 구좌읍	주민동의완료
2015	12	한국 전력 기술	제주한림 해상풍력	풍력	150	제주시 한림읍 수원리 인근해상	입지 및 연계설비 확보
2015	12	남부발전	고흥풍력	풍력	40	전남 고흥군
2015	12	남부발전	평창Ⅱ풍력	풍력	14	경주 감포읍	사업검토중
2015	12	남부발전	영양포도산풍력	풍력	20	경북 영양군	풍황 측정중
2015	12	남부발전	김해풍력	풍력	20	경남 김해시	풍황자료 취득 후 사업성 분석중
2015	12	남부발전	울산고헌산풍력	풍력	20	경남 울산시	사업검토중
2015	12	서부발전	바이오(우드칩,우드펠렛)전소	바이오	40	경기도 평택시	추진중
2015	12	한수원	서울소수력	소수력	10	서울 광진구 자양동	타당성 검토 중
2015	12	POSCO에너지	포항RDF발전사업	폐기물	12	포항시 호동	기재부 심의중
2015	12	MPC율촌	MPC율촌복합연료전지4	연료 전지	5.6	MPC율촌복합발전소 부지내	-
2015	12	MPC율촌	MPC율촌복합연료전지5	연료 전지	5.6	MPC율촌복합발전소 부지내	-
2015	12	SK D&D	북면풍력	풍력	40	경상북도 울진군 북면	풍황계측기 설치예정
2015	12	코오롱글로벌	원주에너지	폐기물	20	강원도 원주시 문막읍	SPC 설립 예정
2016	6	남부발전	안동 연료전지	연료 전지	28	경북 안동시 풍산읍	타당성 조사용역중
2016	7	동성	속사풍력	풍력	40	강원도 평창군 진부면	풍황 측정중
2016	7	글로벌에너지개발	경기바이오열병합	바이오	20	경기도 양주시 광사동	-
2016	8	동성	남병풍력	풍력	40	강원도 평창군 평창읍 고길리	풍황 측정중
2016	8	동성	한천풍력	풍력	40	강원도 양양군 현북면	풍황 측정중
2016	8	한수원	서울연료전지(IV)	연료 전지	30	서울 마포구 상암동	사업 타당성 검토 중
2016	10	POSCO에너지	전남5GW풍력발전해상1차	풍력	300	전라남도 신안군 해상	풍황 측정중
2016	12	동성	근덕풍력	풍력	40	강원도 삼척시	풍황 측정중
2016	12	동성	둔내풍력	풍력	40	강원도 평창군	풍황 측정중
2016	12	글로벌에너지개발	전주바이오열병합	바이오	20	전북 완주군	부지매입 협의진행중
2016	12	한국 해상풍력	서남해해상풍력시범	풍력	400	전북 부안군 위도 ~ 전남 영광군	입지확보 및 계획 시행중
2016	12	남부발전	대화풍력	풍력	90
2016	12	남부발전	대정Ⅱ 해상풍력	풍력	115	제주도 서귀포시	설계기술 용역 중
2016	12	남부발전	삼척용화리 풍력	풍력	20	강원도 삼척시	사업검토중
2016	12	남부발전	삼척노곡리 풍력	풍력	20	강원도 삼척시	사업검토중
2016	12	서부발전	신규풍력	풍력	40		계획중
2016	12	서부발전	태안#2해양소수력	수력	5	충남 태안군	계획중
2016	12	MPC율촌	MPC율촌복합연료전지6	연료전지	5.6	율촌복합발전소 부지내	-
2017	2	글로벌에너지개발	평택바이오열병합	바이오	20	경기도 평택시	초기단계
2017	6	동성	현남풍력	풍력	40	강원도 양양군	풍황 측정중
2017	9	동성	대조풍력	풍력	20	강원도 태백시	풍황 측정중
2017	10	동서발전	남해안 해상풍력	풍력	100	전남/경남 남해안	풍황자원 조사중
2017	12	동성	안인2차풍력	풍력	90	강원도 강릉시	SPC 설립중
2017	12	동성	오두풍력	풍력	90	강원도 정선군	풍황 측정중
2017	12	동성	삼교풍력	풍력	60	강원도 강릉시	풍황 측정중
2017	12	남부발전	목도 해상풍력	풍력	35	부산시 목도
2017	12	남부발전	월정 해상풍력	풍력	99	제주도 제주시 구좌읍 월정리
2017	12	남부발전	영남IGCC	IGCC	300	울산시 남구
2017	12	남부발전	대화Ⅱ풍력	풍력	50	강원도 평창군	풍황측정탑 인허가 준비중
2017	12	남부발전	하도 해상풍력	풍력	150	제주도 제주시	주민합의 추진중
2017	12	동서발전	울돌목조류	조류	14.5	전라남도 진도군	타당성 조사중
2018	10	동성	천봉풍력	풍력	90	강원도 삼척시 근덕면	풍황 측정중
2018	12	서부발전	신규풍력	풍력	40		계획중
2019	9	STX에너지	태양광	태양광	4.8	삼척에너지복합발전단지 내	타당성조사완료
2019	9	STX에너지	해양소수력	수력	10.8	삼척에너지 복합발전단지 내	타당성조사완료
2019	9	STX에너지	바이오메스혼소	바이오	100	삼척에너지 복합발전단지 내	타당성조사완료
2019	10	삼성물산	강릉신재생 (태양광)	태양광	13	-	타당성검토 준비중
2019	10	삼성물산	강릉신재생 (소수력)	수력	5	-	타당성검토 준비중
2019	10	삼성물산	강릉신재생 (풍력)	풍력	6	-	타당성검토 준비중
2019	10	삼성물산	강릉신재생 (연료전지)	연료 전지	7	-	타당성검토 준비중
2019	12	한국 해상 풍력	서남해해상 풍력확산	풍력	2000	전북부안군위도~전남영광군안마군도일원	공유수면 사용 허가 준비
2019	12	서부발전	신규조류	조류	40		계획중
2019	12	서부발전	바이오전소	바이오	40		계획중
2019	12	서부발전	신규 연료전지	연료 전지	40		계획중
2019	12	중부발전	군장IGCC	IGCC	300	전북 군산시 비응도동	부지확보 상태
2020	2	중부발전	강화조력	조력	420	인천광역시 강화군	인허가 진행중
2020	2	삼성물산	삼척신재생 (태양광)	태양광	9	-	타당성 검토준비중
2020	2	삼성물산	삼척신재생 (소수력)	수력	10	-	타당성 검토 준비중
2020	2	삼성물산	삼척신재생 (풍력)	풍력	6	-	타당성 검토 준비중
2020	2	삼성물산	삼척신재생 (연료전지)	연료 전지	6	-	타당성 검토 준비중
2020	5	가로림조력발전	가로림조력	조력	520	충남 서산시	환경영향평가 중
2020	12	서부발전	신규 해상풍력	풍력	100		계획중
2020	12	남동발전	인천 조류발전	조류	100	인천시 옹진군	조류발전자원조사 및 예비타당성조사완료
2021	12	MPC율촌	MPC율촌복합연료전지7	연료 전지	5.6	MPC율촌복합발전소 부지내
합 계					10,581.2

6차 수급계획 반영 신재생설비 세부내역 (건설의향 설비)